발전기별 예방정비 계획

('18. 3. 16)

◌ 대상기간 : 3.17 ∼ 3.25

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1,3 : 03.12 ~ 03.30 #2 : 03.10 ~ 03.30
	의 암	#1 : 02.26 ~ 05.21
	청 평	#2 : 03.17 ~ 03.28
	춘 천	#2 : 03.19 08:00 ~ 18:00 #1 : 03.19 ~ 03.30
	팔 당	#1 : 02.19 ~ 06.28 #2 : 03.14 ~ 04.08
	화 천	#3,4 : 03.24 ~ 05.07
	대 청	#1 : 02.26 ~ 04.21
	소양강
	안 동	#1 : 10.14 ~ ‘18.06.21
	용 담	#1,2 : 03.19 13:00 ~ 17:00
	임 하
	주 암
	충 주	#5 : 01.29 ~ 5.18
	합 천	#2 : 03.01 09:00 ~ 03.31 18:00
양수	무주양수	#1,2 : 03.28 12:00 ~ 14:00	자체기동 사전시험
	산청양수	#1 : 03.17 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : 03.17 ~ 03.19 #2 : 03.20 ~ 03.21
	양양양수	#4 : ‘17.11.30 ~ 06.17 #3 : 03.19 10:00 ~ 03.20 24:00 #1,2,3 : 03.22 12:00 ~ 14:00	자체기동
	예천양수	#1,2 : 03.18 09:00 ~ 18:00	한전작업
	청송양수	#1 : 03.06 08:00 ~ 04.10 18:00 #2 : 03.19 08:00 ~ 03.23 18:00
	청평양수	#2 : 03.23 09:00 ~ 03.25 18:00 #1,2 : 03.19 12:00 ~ 14:00 #1,2 : 03.23 12:00 ~ 14:00	자체기동 자체기동
중유	울산화력
	평택화력	#2 : 03.26 ~ 05.04
	대산복합
석탄	당 진	#4 : 02.19 ~ 03.20 #6 : 03.19 ~ 03.25 #9 : 03.03 ~ 06.08	거래소조정
	보 령	#1,2 : 03.01 ~ 6.30 #1 : 03.14 09:00 ~ 03.18 18:00 #2 : 03.14 09:00 ~ 04.04 18:00 #4 : 03.03 ~ 04.01 #7 : 03.17 00:00 ~ 3.22 18:00
	신보령
	삼천포	#1,2 : 03.01 ~ 6.30
	여 수	#2 : 03.15 ~ 04.05
	영 흥	#4 : 03.07 ~ 05.03
	태 안
	하 동	#2 : 03.23 ~ 3.29 #6 : 03.17 00:00 ~ 15:00
	삼척그린	#1 : 03.11 ~ 03.18
	북 평
	호 남	#1 : 03.05 ~ 04.11
국내탄	동 해	#2 : ‘17.10.28 ~ ‘18.03.20 #1 : 02.24 ~ 07.08	기간연장
	영 동	#2 : ‘18.01.01 ~ 06.30
기타(중앙)
제주지역		남제주기력#2 : 03.17 ~ 03.18 제주내연#1 : 03.19 06:00 ~ 03.27 18:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산	#1CC : 03.17 00:00 ~ 3.18 21:00
	보 령
	GS당진
	부 산	#2,4CC : 03.17 ~ 03.18 #1CC : 03.24 ~ 03.25
	부 천
	분 당	#5GT : 03.04 ~ 03.21
	서인천	#2CC : 03.05 ~ 03.27
	송 도
	신인천
	안 양
	영 월
	울 산	#2ST : 03.13 ~ 03.21 #1CC : 03.29 ~ 04.26	정비지연 거래소조정
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일 산
	파주 열병합
	판교 열병합	#1CC : 03.17 09:00 ~ 13:00
	평 택
	포스코	#3ST : 03.24 ~ 4.16
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합	ST : 03.24 ~ 03.25
	오 성
	별내 열병합
	위례 열병합
	세종 열병합	#1CC : 03.17 ~ 03.18
	안 동
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방 열병합
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산
	포천천연	#1CC : 03.18 08:00 ~ 21:00
	춘천집단 열병합
	부산정관
	영남파워
	동탄 열병합
원자력	고 리	#3 : ‘17.01.19 ~ ‘18.05.06 #4 : ‘17.04.05 ~ ‘18.04.12	#3 : 지연 #4 : 지연
	신고리	#3 : ‘18.01.12 ~ ‘18.04.21 #2 : ‘18.02.20 ~ ‘18.05.03	#1 : 지연 #3 : O/H #2 : O/H
	한 빛	#4 : ‘17.05.18 ~ ‘18.12.30	#4 : 지연
	한 울	#2 : ‘17.11.24 ~ ‘18.05.11 #3 : ‘17.12.05 ~ ‘18.04.28 #5 : ‘18.03.09 ~ ‘18.05.12	#2 : O/H #3 : O/H #5 : O/H
	월 성	#1 : ‘17.05.28 ~ ‘18.03.25 #4 : ‘18.01.24 ~ ‘18.03.20	#1 : 지연 #4 : O/H
	신월성	#2 : ‘17.09.20 ~ ’18.04.08	#2 : 지연

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)