발전기별 예방정비 계획

('18. 3. 23)

◌ 대상기간 : 3.24 ∼ 4.1

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1,3 : 3.12 ~ 3.30 #2 : 3.10 ~ 3.30
	의 암	#1 : 2.26 ~ 5.21
	청 평	#2 : 3.17 ~ 3.28
	춘 천	#1 : 3.19 ~ 3.30
	팔 당	#1 : 2.19 ~ 6.28 #2 : 3.14 ~ 4.08
	화 천	#3,4 : 3.24 ~ 5.07
	대 청	#1 : 2.26 ~ 4.22
	소양강
	안 동	#1 : 10.14 ~ ‘18.06.21 #2 : 3.28 09:00 ~ 4.06 18:00
	용 담
	임 하	#2 : 3.27 09:00 ~ 4.09 18:00
	주 암	#1,2 : 3.28 13:00 ~ 17:00
	충 주	#5 : 1.29 ~ 5.18
	합 천	#1 : 3.28 09:00 ~ 18:00 #2 : 3.01 ~ 4.30
양수	무주양수	#1,2 : 3.28 12:00 ~ 14:00	자체기동 사전시험
	산청양수
	삼랑진양수
	양양양수	#4 : ‘17.11.30 ~ 6.17
	예천양수	#1 : 3.31 08:00 ~ 6.13 18:00
	청송양수	#1 : 3.06 08:00 ~ 4.10 18:00
	청평양수
중유	울산화력	#5 : 3.24 ~ 3.26
	평택화력	#2 : 3.26 ~ 5.04
	대산복합
석탄	당 진	#6 : 3.19 ~ 3.25 #7 : 3.24 13:00 ~ 3.25 21:00 #8 : 3.26 ~ 5.14 #9 : 3.03 ~ 6.08
	보 령	#1,2 : 3.01 ~ 6.30 #4 : 3.03 ~ 4.01 #5 : 3.26 ~ 5.21
	신보령	#2 : 3.23 20:00 ~ 3.26 06:00 #1 : 4.01 ~ 8.8
	삼천포	#1,2 : 3.01 ~ 6.30
	여 수	#2 : 3.15 ~ 4.05
	영 흥	#4 : 3.07 ~ 5.03
	태 안	#2 : 3.31 ~ 6.24 #3 : 3.24 08:00 ~ 3.25 13:00
	하 동	#2 : 3.23 ~ 3.29 #7 : 3.30 ~ 6.11
	삼척그린	#1 : 3.30 ~ 4.02
	북 평
	호 남	#1 : 3.05 ~ 4.11
국내탄	동 해	#1 : 2.24 ~ 7.08	기간연장
	영 동	#2 : ‘18.01.01 ~ 6.30
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 3.19 06:00 ~ 3.27 18:00 제주GT#3 : 3.28 09:00 ~ 10:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령	#1CC : 3.21 ~ 3.30
	GS당진
	부 산	#1CC : 3.24 ~ 3.25 #3CC : 3.31 ~ 4.07
	부 천	#1GT : 3.25 ~ 4.29 #1ST : 3.25 ~ 5.08
	분 당
	서인천	#2CC : 3.05 ~ 3.27 #1CC : 4.02 ~ 4.05
	송 도
	신인천	#1CC : 3.27 ~ 5.18 #3ST : 4.01 ~ 4.30
	안 양
	영 월
	울 산	#1CC : 03.29 ~ 04.26
	율 촌	#4GT : 3.24 ~ 3.25
	인 천
	인천공항
	일 산
	파주 열병합
	판교 열병합
	평 택
	포스코	#3ST : 03.24 ~ 4.16
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합	ST : 03.24 ~ 03.25
	오 성
	별내 열병합
	위례 열병합
	세종 열병합
	안 동
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방 열병합
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산	#11GT : 3.31 ~ 4.02
	포천천연	#1CC : 3.25 09:00 ~ 19:00
	춘천집단 열병합
	부산정관
	영남파워
	동탄 열병합	#2CC : 3.31 06:00 ~ 4.08 24:00
원자력	고 리	#3 : ‘17.01.19 ~ ‘18.05.06 #4 : ‘17.04.05 ~ ‘18.04.12	#3 : 지연 #4 : 지연
	신고리	#3 : ‘18.01.12 ~ ‘18.04.21 #2 : ‘18.02.20 ~ ‘18.05.03	#3 : O/H #2 : O/H
	한 빛	#4 : ‘17.05.18 ~ ‘18.12.30	#4 : 지연
	한 울	#2 : ‘17.11.24 ~ ‘18.05.11 #3 : ‘17.12.05 ~ ‘18.04.28 #5 : ‘18.03.09 ~ ‘18.05.12	#2 : O/H #3 : O/H #5 : O/H
	월 성	#1 : ‘17.05.28 ~ ‘18.03.31 #2 : 3.22 ~ 5.25	#1 : 지연 #2 : O/H
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)