전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입 순연을 위한 규칙개정(안)	제23-1차 (2023. 2. 17)

Ⅱ. 개정 내용

□  다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입 순연을 위한 규칙개정(안)

가. 제안취지

□ 다조합 복합발전기의 실제 운전조건을 반영하기 위해 조합별 비용함수 도입에 대한 규칙개정을 완료한 바 있음 (’20-6차 규칙개정, ’20.12월)

□ 당초 제도 설계시 비제약 가격 기반으로 조합별 비용함수를 도입하려 했으나, 실계통기반으로 변경, 발전계획의 이원화에 따라 다수의 수정사항 발생

□ 또한, 실계통기반 시장 도입 연기(‘22.7月 →’22.9月)로, 조합별 비용함수 시스템을 위한 충분한 개발시간 및 검증시간 부족한 실정

ㅇ 실계통기반 및 조합별 비용함수 시스템 개발을 동일업체(장인의공간)가 수행하기 때문에 순차 작업 불가피(先 실계통기반 → 後 조합별비용함수)

□ 이에 따라 시스템 보완, 철저한 사전점검, 회원사 시스템변경 및 검증 강화를 위한 모의운영을 진행하고자 도입일정을 순연(’23.3월→’23.11월, 8개월 연장)하고자 함

나. 주요 개정내용

□ (시행일정 순연) “다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수” 도입에 대한 충분한 모의운영을 통한 전력시장 및 계통운영 정확성 제고를 위해 시행일정을 8개월 순연(본문 부칙 신설)

현 행	변 경
’23.3월 1일 시행 (실계통기반 하루전시장 도입 후 6개월 이내)	’23.11월 1일 이내 시행

다. 개정 효과

□ 시스템 보완 및 철저한 검증과 회원사 시스템 변경 및 확인 이후 제도를 도입하여 전력시장 및 전력계통 정확성 제고, 회원사에게 제도개선 사항에 대해 안정적으로 적응할 수 있는 환경 제공

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 수정가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

ㅇ 다만, 제도 시행 전 회원사의 충분한 준비시간 확보를 위해
사전공지와 관련한 내용을 부칙에 추가

【다조합 복합발전기 조합별 비용함수 추진 경과】

ㅇ(’20.12월) 조합별 비용함수 도입을 위한 규칙개정 (’23.1월 시행*)

*실계통기반 하루전시장 도입 이후 6개월 이내 시행

ㅇ(’22.6월) 실계통기반 하루전시장 도입 연기로 조합별 비용함수 도입일정 순연 (’23.3월 시행)

ㅇ(’22.9월~) 조합별 비용함수 적용 시스템 개발 및 모의운영(’22.11월~12월) 단계에서 보완사항 발견

(붙임) 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

【붙임】                           현행 규칙 및 개정(안) 대비표

□  다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입 순연을 위한 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
부 칙 (2021. 1. 1.) 제8조(다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정의 경과조치) 제1장, 제2장, 별표1, 별표2, 별표6, 별표7, 별표20의 다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정은 정산시스템 등의 관련 전산시스템을 보완하여 제7조에 따른 실계통기반 하루전시장 시행일 이후 6개월 이내 전력거래시스템(e-power market)에 공지하는 날로부터 시행한다.	부 칙 (2021. 1. 1.) 제8조(다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정의 경과조치) 제1장, 제2장, 별표1, 별표2, 별표6, 별표7, 별표20의 다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정은 정산시스템 등의 관련 전산시스템을 보완하여 제7조에 따른 실계통기반 하루전시장 시행일 이후 6개월 이내 전력거래시스템(e-power market)에 공지하는 날로부터 시행한다.
< 신 설 >	부 칙 (2023. 00. 00.) 제X조(다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입 순연과 관련된 규정의 경과조치) 부칙(2021. 1. 1.) 제8조(다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정의 경과조치)에도 불구하고, 제1장, 제2장, 별표1, 별표2, 별표6, 별표7, 별표20의 다조합 복합발전기 운전조합별 비용함수 도입과 관련된 규정은 전산시스템 개발·점검 및 모의운영을 위해 2023년 11월 1일 이내 전력거래시스템(e-power market)에 공지하는 날로부터 시행한다. 시행일은 전력거래시스템(e-power market)에 10영업일 이전에 사전 공지한다.	- 조합별 비용함수 모의운영 기간을 위한 8개월 연장을 위한 부칙 신설