공사감독자 배치기준 확정

「건설기술 진흥법」 제39조의2 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2023-370호, 2023.6.30.)」 제8조에 따라 전력거래소 직장어린이집 건립공사 「공사감독자 배치 기준」을 붙임과 같이 공고합니다.

2023년 08월 31일

한국전력거래소 이사장

[붙임]

공사감독자 배치 기준

□ 건설사업관리 기술인 투입인원 내역(건축분야)

1. 투입 인원수 산정기준

단계	연번	기본업무		단위	적용수량	기준 인원수	보정계수			난이도	투입 인원수	비 고
							a	b	c
공 통 업 무 ①	1	과업착수준비		식	0	7.0					0
	2	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	0	20.5					0
	3	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	0	27.3					0
	4	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	0	22.3				0.343	0
	5	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	0	0.3				0.343	0
	6	클레임 사전분석		식	0	31.0		1.1			0
	7	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	0	27.3					0
			2)시공 이후 단계		0	54.6					0
시 공 단 계 ④	1	공사착수		식	1	72.7					72.7
	2	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	288	2.9	1.0	1.1	1.0	0.277	254.5
	3	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	12	10.0	1.0	1.1		0.277	36.6
	4	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12	12.6	1.0			0.277	41.9
	5	시공계획검토		공사 개월	12	8.8	1.0	1.1	1.0	0.277	32.2
	6	기술검토 및 교육		공사 개월	12	10.1	1.0			0.277	33.6
	7	공정관리		공사 개월	12	9.0	1.0	1.1		0.277	32.9
	8	안전관리		공사 개월	12	22.0		1.1		1.0	290.4
	9	환경관리		공사 개월	12	5.3		1.1		0.277	19.4
	10	설계변경 관리		공사 개월	12	7.5			1.0	0.277	24.9
	11	기성검사		회	1	6.6					6.6
	12	준공검사		식	1	3.8					3.8
	13	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	12	2.8	1.0				33.6
	14	하도급적정성검토		공사 년수	1	23.0				0.277	6.4
	15	시공단계의 예산검증 및 지원		회	1	36.4				0.277	10.1
	16	일반행정업무		용역 일수	264	1.6				0.277	117

단계	연번	주요업무	단위	적용수량	기준 인원수	보정계수			난이도	투입 인원수	비 고
						a	b	c
시 공 후 단 계 ⑤	1	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인	식	0	13.6	1.0				0
	2	시설물 유지관리지침서 검토	식	0	32.6					0
	3	시설물유지관리 업체 선정	식	0	20.8					0
	4	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원	식	1	27.2					27.2
투입인원수 합계			(①+④+⑤)			0(①) + 1,016.6(④) + 27.2(⑤)
			시공단계 85% (상주기술인 기준)			0(①) + 864.1(④) + 27.2(⑤)
						891.3인‧일 / (공사감독 1,150.6인‧일)

□ 공사감독자 배치계획

구분	등급	시공 단계(12M)												계 (A)	환산비 (B)	적용 인·일 (A×B)	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축1	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	305.2
건축2	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	305.2
건축3	초급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	0.659	174.0
토목	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	366.2	기술사
계																1,150.6