공사감독자 배치기준 확정

「건설기술 진흥법」 제39조의2 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2023-370호, 2023.6.30.)」 제8조에 따라 전력거래소 육지 후비 전력관제센터 건립공사 「공사감독자 배치 기준」을 붙임과 같이 공고합니다.

2023년 08월 31일

한국전력거래소 이사장

[붙임]

사업특성 및 발주청 역량 평가

공사특성		사업여건				공사 수행방식	발주청 역량		합계
공종 난이도	공사 난이도	사업 규모	사업 기간	민원 발생	사업 경험		인력 수	경력
10/15	5/15	8/10	3/5	3/5	3/5	10/15	20/20	10/10	72/100

□ 공사특성 (30점)

구분		점수	계
공종 난이도 (15점)	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 설계ㆍ시공 관리의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 건설공사 또는「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 복잡한 공종	15	10
	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 공사 외의 공사로「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 보통의 공종 공사	10
	상기 외의 공사	5
공사 난이도 (15점)	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 1종에 해당하는 공사	15	5
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 2종에 해당하는 공사	10
	상기 외의 공사	5

□ 사업여건 (25점)

구분		점수	계
사업규모 (10점)	총 공사비 500억원 이상	10	8
	총 공사비 200억원 이상 500억원 미만	8
	총 공사비 100억원 이상 200억원 미만	6
	총 공사비 100억원 미만	4
사업기간 (5점)	공사기간 3년 이상	5	3
	공사기간 1년 이상 3년 미만	3
	공사기간 1년 미만	1
민원발생 가능성 (5점)	민원발생 가능성이 높다	5	3
	민원발생 가능성이 통상적인 수준이다	3
	민원발생 가능성이 낮다	1
유사사업 경험 (5점)	가용인력이 최근 5년간 수행경험 없음	5	3
	가용인력이 최근 5년간 5건 미만 수행	3
	가용인력이 최근 5년간 5건 이상 수행	1

□ 공사수행방식 (15점)

구분	점수	계
기술제안입찰방식, 대안입찰방식을 적용하는 공사, 설계경기를 적용하여 설계의 중요성이 강조된 공사, 국제설계경기를 적용하여 설계단계에서 외국사 또는 외국사와 공동도급업체가 참여할 수 있는 공사	15	10
기타공사	10
설계․시공일괄입찰방식을 적용하는 공사	5

□ 발주청 역량 (30점)

구분		점수	계
인력 수 (20점)	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 80% 미만	20	20
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 80% 이상, 90% 미만	15
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 90% 이상	10
경력 (10점)	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 미만	10	10
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 이상, 15년 미만	7
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 15년 이상	3

공사감독자 배치 기준

1. 건축분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	적용 수량	기준 인원수 (인･일)	보정계수			난이도	투입 인원수
단계	기본업무				고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	1	7.0					7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	1	20.5					20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	1	27.3					27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	1	22.3				0.512	11.4
	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	528	0.3				0.512	81.1
	클레임 사전분석		식	0	31.0		1.0			0
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	0	27.3					0
		2)시공 이후 단계		1	54.6					54.6
시공 단계	공사착수		식	1	72.7					72.7
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	576	2.9	1.0	1.0	1.0	0.512	855.2
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	24	10.0	1.0	1.0		0.512	122.9
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	24	12.6	1.0			0.512	154.8
	시공계획검토		공사 개월	24	8.8	1.0	1.0	1.0	0.512	108.1
	기술검토 및 교육		공사 개월	24	10.1	1.0			0.512	124.1
	공정관리		공사 개월	24	9.0	1.0	1.0		0.512	110.6
	안전관리		공사 개월	24	22.0		1.0		1.0	528.0
	환경관리		공사 개월	24	5.3		1.0		0.512	65.1
	설계변경 관리		공사 개월	24	7.5			1.0	0.512	92.2
	기성검사		회	1	6.6					6.6
	준공검사		식	1	3.8					3.8
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	24	2.8	1.0				67.2
	하도급적정성검토		공사 년수	2	23.0				0.512	23.6
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	1	36.4				0.512	18.6
	일반행정업무		용역 일수	528	1.6				0.512	432.5
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		식	0	13.6	1.0				0
	시설물 유지관리지침서 검토		식	0	32.6					0
	시설물유지관리 업체 선정		식	0	20.8					0
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	0	27.2					0
투입인원수 합계						2,988 인·일 (상주 2,570 인·일, 기술지원 418 인·일)

2. 건설사업관리 기술인 배치계획(상주 117.8인·월, 기술지원 19인·월)